투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행 - 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 03. 03~ 2016. 12. 31

다. 계약금액 : 금665,008,000원

라. 도 급 자 : ㈜크로스텍엔지니어링 대표 조광치

마. 설계변경사유

○ 도로소파, 망상균열 등 포트홀 예상구간 소규모 정비물량이 당초 예상물량보다 증가

○ 서울형포장구간, 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 단면설계를 위한 아스콘코아 채취 등으로 예상물량보다 증가

바. 변경내역                                          (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	1,500,508,000	1,500,508,000	-
도급비	665,008,000	665,008,000	-
관급비	428,975,000	428,975,000	-
이전비	406,525,000	406,525,000	-

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이기영		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	06/13 이종엽
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-2674	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개(5)