문서번호	토목부-11922
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		代윤원섭	06/13 김영수
협조

주교량 보도데크 연결로 변경 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

(토목부)

주교량 보도데크 연결로 변경 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

주교량 보도데크에서 제방도로로 연결하는 시점부 좌·우측 연결로의 종단경사 재조정등에 대한 변경 검토보고임

1		관련근거

❍ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 제2조제1항

❍ 동일(겸재)감 제16-131호(2016. 6. 9.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

❍ 규    모

- 본교량 : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

❍ 공사기간 : 총괄 2008.10.23. ∼ 2016.12.31.(8차 2016. 1. 4. ~ 2016.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 30,082백만원(8차 3,070백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1

❍ 시 공 사 : ㈜한진중공업외 1

3		감리단 보고내용

❍ 변경사유

- 시점부 보도데크 연결로 종단경사가 좌/우(20.6/21.5%)로 좌측 임시개통중인 연결로는 동절기 및 우기시 통행이 불편하다는 민원이 제기되었으며, 우측 연결로는 상부 램프B 교량 설치로 형하공간 확보가 필요하여 좌·우측 시설기준(12%이하)에 맞게 구배조정이 필요함

- 동절기 안전감사 결과에 따라 기초 근입깊이 조정(0.4→1.1m)이 필요함

❍ 검토내용1

- 보도데크 연결로 현황

· 설계현황

구 분	연 장(m)	구 배(%)	비 고 (현 상 태)
시점 연결로(좌측)	6.5m	20.6%	시공완료(민원에 의한 구배조정)
시점 연결로(우측)	4.7m	21.5%	미시공[접속램프(B) 저촉으로인한 구배조정]
종점 연결로(좌측)	4.6m	8.9%	시공완료
종점 연결로(우측)	6.3m	8.0%	시공완료

· 설치현황

- 보도데크 연결로 검토

· 구배조정 검토

구 분	문 제 점	검 토 의 견	비 고
시점 연결로 (좌측)	- 경사구간 구배가 20.6%로 동절기 및 우기시 통행이 불편 하다는 민원이 제기됨	- 민원 및 통행 불편해소를 위하여 관련 시설기준에 의거 구배조정“장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙” (20.6% → 12.0%)	임시 개통중
시점 연결로 (우측)	- 접속램프 교량(B) 설치에 따른 형하공간 확보 및 구배가 21.5%로 좌측과 동일한 민원이 예상됨	- 형하공간 확보를 위해서 기존 보도데크 조정 및 민원해소 차원 에서 구배조정 (21.5% → 11.6%)	미시공

· 주요변경 현황

구 분		연 장(m)			구 배(%)			비 고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
시점 연결로	좌측	6.5	9.6	3.1	20.6	12.0	-8.6
	우측	4.7	8.7	4.0	21.5	11.6	-9.9
안전감사 지적사항		- “구조물 기초설계기준”에 준하여 기초근입깊이 변경 당초 0.4m → 변경 1.2m(Df 1.1m)

· 기술지원감리 검토결과(토질, 구조분야)

구 분	감리단(기술지원감리원) 의견	조치(계획)	비 고
기초·토질 분야	- 보도데크 기초 허용지지력(반력 및 침하량)은 제방 성토층에 대한 설계정수를 추정하였으므로 기초설치 전 평판재하시험 실시하여 허용지지력 최대반력 qmax=20.3ton/㎡ 이상 확인할 것	- 설치전 평판재하시험 실시	“기술 검토서“ 별첨
구 조 분 야	- 주거더(H-300×300×10×15) 및 Cross Beam (ㄷ-200×80×7.5×11)에 대한 안정성은 확보됨. 단, 설계도에 부재규격 및 강재종류 기호 표기 - 설계도 콘크리트기초(600×600×1200) 설계기준 강도 표기.	- 설계도면에 부재규격 및 강재종류 기호, 설계기준강도 표기함

❍ 적용단가 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

①항 1호에 의거 계약단가 적용

· 신규비목 :공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)      ①항 2호에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에      낙찰율을 곱한 단가 적용

- 공사비 증·감 현황

공 종	단위	수량	금 액(천원)
			당 초	변 경	증·감
보도데크 연결로 설치	식	1	63,518	97,969	34,451
제경비			45,282	58,931	13,649
도 급 액			108,800	156,900	48,100
관급자재			-	400	400
총공사비			108,800	157,300	48,500

4		조치의견

❍ 민원해소 및 형하공간 확보, 기초근입깊이 조정을 시설물 설치기준에 따라 검토한        주교량 보도데크 연결로에 대한 감리단의 검토의견이 적정함으로 승인하고, 향후        설계변경시 반영하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.