문서번호	도로보수과-3203
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
조경현		06/13 김준섭
협 조
	주무관		박영권

서울형포장설계 구간 포장단면 및 관급자재 변경 - 2016년 노후포장도로 정비공사(B구역) -

2016. 6

남부도로사업소

(도로보수과)

서울형포장설계 구간 포장단면 및 관급자재 변경

- 2016년 노후포장도로 정비공사(B구역) -

1. 근 거

- 도로포장연구센터-1033(2016. 5.12) :「2016년 노후포장도로 정비구간」서울형    포장설계법 적용 계획단면(안) 송부

- 도로보수과-2005(2016.4.12.) : 2016년 노후포장도로 정비 및 발주계획

2. 내 용

○ 당초 2016년 노후포장도로 정비공사(B구역) 시흥대로『시흥사거리 ~ 박미삼거리(중앙버스전용차로)』는 주행차로 구간 t=12.5cm, 정류장 구간 t=20cm 절삭 후 덧씌우기(표층-개질SMA, 기층-BB-4)로 설계되어 있으나,

○ 서울형포장설계법의 계획단면이 t=12.5cm 절삭후덧씌우기(표층-개질SMA, 중간층-WC-5) 단일단면으로 통보됨에 따라 변경이 필요한 실정임

3. 조치의견

○ 2016년 노후포장도로 정비 및 발주계획(도로보수과-2005(2016.4.12.))에 따라 『시흥사거리 ~ 박미삼거리(중앙버스전용차로)』은 서울형포장설계법 단면을 적용하여 아래와 같이 변경코자 함

- 절삭후덧씌우기 t=12.5cm 단일 단면적용

- 관급자재 BB-4(기층용)를 WC-5(중간층용)으로 변경

아스콘 종류	당 초	변 경
BB-4(기층용)	1,185톤	-
WC-5(중간층용)	-	1,097톤

끝.