투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한연기 의뢰(2016년 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 실시설계 용역)

1. 녹지관리과-5452(2016. 6. 13)호와 관련입니다.

2. 2016년 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 실시설계 용역에 대하여 다음과 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 2016년 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 실시설계 용역

- 용역기간 : 2016. 4. 27 ~ 2016. 6. 15

- 용 역 비 : 금17,200,000원

- 도급업체 : 새암조경(주) 대표 류제진

나. 준공기한 연기

공 사 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
2016년 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 실시설계 용역	‘16.4. 25	‘16.4. 27	‘16.06.15	‘16.07.05

다. 연기사유 : 녹색 기술 자문 및 시 설계 심의 절차 이행

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	안순호		주무관	박병구		녹지관리과장	06/14 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-5466	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5950	/전송	02-3783-5949	/	018shan@seoul.go.kr	/	대시민공개