문서번호	토목부-12066
결재일자	2016.6.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		이동훈	06/14 김영수
협조
	주무관		오열상

해체 강연선 보관용 선반 제작비 반영 검토보고

(정릉천고가 보수·보강공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

토  목  부

해체 강연선 보관용 선반 제작비 반영 검토보고

(정릉천고가 보수·보강공사)

해체한 강연선, PE관 등을 현장에 보존하라는 안전대책 자문위원회(제15차, ‘16.3.22.) 권고에 따라 강연선 보관용 선반을 제작하여 보존하고 그 제작비를 반영코자 검토보고함.

1		관련근거

❍ 정릉천고가 안전대책 자문위원회(‘16.3.22.) : 철거 강연선 현장보존 권고

❍ 정릉천(감리)2016-19호 : 정릉천고가 철거 강연선 현장보존방안 검토보고

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 정릉천고가 보수·보강공사

❍ 규    모 : 텐던 교체 6개소

❍ 공사기간 : 2016. 3. 3. ∼ 6.30.

❍ 공 사 비 : 881백만원

❍ 시 공 사 : ㈜후레씨네코리아

❍ 감 리 단 : ㈜동일기술공사

3		건설사업관리단 보고내용

❍ 정릉천고가 보수·보강공사의 텐던 교체를 완료하고 철거된 강연선 등을 관련 학회조사 및 교육용으로 현장에 보존하자는 자문위원회의 요청에 따라 현장 보존 방안을 강구함.

❍ 공사비 검토

구 분	수 량	금 액	비 고
선 반	319개소	8,350,000원
간 접 비	1식	5,250,000원
공 사 비		13,600,000원	※낙찰률 적용

❍ 보존방안

- 보존위치 : P39~P42구간 6블럭, P45~46구간 3블럭

- 보존방법 : 보관용 선반(900×450×80mm) 제작

- 선반제작 도면

4		조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 정릉천고가 안전대책 자문위원회(‘16.3.22.) 권고에 따라 해체 강연선 보관용 선반을 제작하여 현장에 보존하도록 하고, 그 비용을 향후 설계변경 시 반영코자 함.

붙  임 : 건설사업관리단 검토의견서 및 자문위원 자문의견서 각 1부.  끝.