문서번호	도로보수과-5734
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김경욱		06/14 김권일
협조

관급자재 납품기한 및 물량 변경 보고

2016. 06.

강서도로사업소

도로보수과

관급자재 납품기한 및 물량 변경 보고

□ 공사개요

○ 공   사   명 : 화곡고가 하부 노측용 방호울타리 설치

○ 관 급 자 재 : 노측용 방호울타리

○ 납품요구일자 : 2016. 05. 09.

○ 시   공   사 : ㈜SW도로안전 대표 신 희 수

□ 보고내용

○ 관급자재의 납품기한 및 물량 변경 필요

-최초 관급자재 구매 요청시, 누락된 물량에대한 추가 구매가 필요하

지만, 납품기한을 초과하여 추가 구매가 불가능한 바, 납품기한과

구매물량을 동시에 변경하고자 함.

□ 변경내역

○ 납품기한

- 당초 : 16. 06. 08.

- 변경 : 16. 06. 20.

○ 구매물량

품명	단위	단가	당초수량		변경수량		증감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
알루미늄제 교량난간	경간	566,000	21	11,886,000	23	13,018,000	2	1,132,000
합 계				11,886,000		13,018,000		1,132,000

끝.