문서번호	소방행정과-7504
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이용	임한선	이재호		06/14 장현태
협 조

청사시설물 교체를 통하여 쾌적한 근무환경 조성을 위한 -

북가좌119안전센터 외 2개센터 화장실 개선 공사

소 방 행 정 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사시설물 교체를 통하여 쾌적한 근무환경 조성을 위한 -

북가좌119안전센터 외 2개센터 화장실 개선 공사

북가좌119안전센터외 2개센터 화장실 개선공사를 통하여 민원인들의 편의를 도모하고 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ

관련근거

본부 소방행정과-1128(2016.1.13.)호 『2016 회계연도 세출예산 재배정 계획 알림』

소방행정과-8077(2015.7.1.)호 『2016년 예산편성을 위한 사업설명서 제출』

Ⅱ

일반현황

북가좌119안전센터 : 증가로 242(연면적984.81㎡, 3/1층)

홍  은119안전센터 : 홍은중앙로 83 (연면적 660.52㎡, 3/1층)

미  근119안전센터 : 통일로113 (연면적 315.02㎡, 2층)

예산배정액 : 금44,521,000원(금사천사백오십이만원)

Ⅲ

공사계획

북가좌119안전센터 화장실 개선

	북가좌119안전센터 화장실 사진

홍은119안전센터 화장실 개선

	홍은119안전센터 화장실 사진

미근119안전센터 화장실 개선

	미근119안전센터 화장실 사진

Ⅳ

총사업비예산현황

계(천원)	설계비	공사비	비고
44,521	3,100	41,000	추정

※ 설계비 산정 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

Ⅴ

추진계획

계약방법 :

설계용역 : 전자공개 수의시담

화장실개선공사 : 전자공개 수의계약

설계용역 계약 : 2016. 6.14 ~ 6. 16

설계용역 : 2016. 6.16 ~ 6. 24

입찰공고 : 2016. 6.27 ~ 7. 4

공사계약 : 2016. 7. 4 ~ 7. 7

공사기간 : 2016. 7. 8 ~ 7. 22

준공검사 : 2016. 7. 25~ 7. 27

Ⅵ

열사를 환경 개선을 통하여 직장 분위기 조성   열악한 청사를 환경 개선을 통하여 직장 분위기 조성  열악한 청사를 환경 개선을 통하여 직장 분위기 조성

기대효과

후생복지 근무환경 개선을 통하여 밝은 직원사기 앙양

청사 시설물 개선으로 청사 유지관리의 효율적 운영으로  쾌적한       업무환경 조성.

환경개선공사를 실시 방문 민원인 편의를 도모 청렴도 향상에        이바지 하고자 함.  끝.