문서번호	총무과-20038
결재일자	2016.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	총무과장
채충일	임철수	06/14 이혜경

『민간건물 추가 임차에 따른』

기계설비 공사계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

행 정 국

(총무과)

『민간건물 추가 임차에 따른』

기계설비 공사계획 보고

민간건물(청계별관)을 추가 임차하여 사무공간으로 재배치함에

따라 기계설비공사를 시행하여 쾌적한 근무환경을 조성코자 함.

□ 추진근거

○ ‘16년도 조직개편 관련 청계별관 임차 및 청사 재배치 계획

– 행정1부시장 방침 제145호(총무과-15614, ‘16.5.3)

□ 건물현황

○ 대상 : 더프리미어플레이스 빌딩

○ 위치 : 중구 청계천로 8 (본관 직선거리 376m)

○ 규모 : 지하5/지상15층, 연면적 16,443㎡

○ 임차 : 2개층(4~5층), 2,076㎡(전용 1,106㎡)

지하5층 기계실	사무실(4~5층)	5층 탕비실

□ 공사계획

○ 공사기간 : ‘16.6.18~6.26 (8일간)

○ 기계설비 공사내용

- 탕비실 씽크대 급배수시설 : 2개소

․ 4, 5층 : 씽크대, 급수, 배수설비 설치

※ 각층 화장실에서 급배수 분기관 연결

- 음수대설치 : 2개소

․ 4, 5층 음수대, 급수, 배수설비 설치

※ 급수관은 기존 직수배관에서 스텐배관으로 4, 5층까지 연결

※ 퇴수관은 화장실 배수관에 연결

- 개별 냉난방설비 : 2개소 (15층 회의실, 샤워장 남자탈의실)

․ 4, 5층 회의실은 옥상 실외기까지 원거리에 따른 고비용 등으로 설치에서 제외

- 비데설치 : 10개소

․ 2개층×5개(남자 3대, 여자 2대)/층 = 10개

- 칫솔소독기 : 3개소 (장소가 좁아 희망층에만 설치)

․ 5층 : 1개, 15층 : 2개

□ 소요예산 : 약 29,200천원

○ 기계설비 연간단가 : 14,000천원

- 급배수시설 : 2개소×4,000천원 = 8,000천원

- 음수대설치 : 2개소×3,000천원 = 6,000천원

○ 일상경비 지출 : 15,200천원

- 개별 냉난방기 : 2개소×5,000천원 = 10,000천원

※ 탈의실 일시 폐쇄로 2회에 나누어 설치(15층 회의실→ 탈의실)

- 칫솔소독기 : 3개소×850천원 = 2,550천원

- 비데설치 : 10개×250천원 = 2,500천원

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

□ 추진일정

○ ‘16.6.14~6.17 : 물품구매

○ ‘16.6.18~6.26 : 공사시행 및 완료. 끝.