문서번호	조경과-3115
결재일자	2016.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	조경과장		관리부장
김규희	김흔진	代강금완		06/15 代이경로
협 조

- 2016년 서울대공원 등산로 정비공사 -

시설공사 설계변경 계획

2016. 6

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2016년 서울대공원 등산로 정비공사 -

시설공사 설계변경 계획

서울대공원 산림욕장길의 이용객 안전과 편의를 위해 노후시설물 정비하고 휴게공간 조성하기 위해 시행 중인 『2016년 서울대공원 등산로 정비공사』의 현장 여건에 따른 일부공정 추가 물량 증감 등 변경사항에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2016년 서울대공원 등산로 정비공사

위    치 : 서울대공원 산림욕장 길 (아까시아숲 ~ 쉬어가는 숲)

공사기간 : 2016. 4. 18 ~ 2016. 6. 16

사업내용 : 휴게공간 조성 3개소(자연과 함께하는 숲, 얼음골숲, 쉬어가는숲)

노후시설 철거, 노면정비, 위험수목 제거 등

도  급  비 : 금170,643천원

도 급 자 : 포천시산림조합 대표 남궁 종

2		그동안 추진 경위

2016. 1. 15  사업계획 수립

2016. 2. 5 ~ 3. 5 실시설계 용역

2016. 4. 18  공사 착공

3		설계변경 주요 내용

설계변경 사유

❍ 벤치 등 노후시설 철거 물량중 수리후 재사용 가능한 시설 수량변경

❍ 기존 노면폭 등 현황 고려 목계단 규격 및 수량변경

❍ 휴게데크 기초 보호를 위한 축대목 추가시공

❍ 작업여건 고려 휴게데크 위치 변경 (생각하는 숲→자연과 함께하는숲)

❍ 기타 현장여건에 따른 실시공물량 정산 반영

예산현황

(단위:원)

구분		당 초	변 경	증 감	비고
총공사비		218,983,780	247,880,820	증28,942,040
도급비	공 급 가 액	166,004,810	195,342,463
	부가가치세	4,638,580	7,374,537
	도급공사비	170,643,390	202,717,000	증32,073,610
관 급 자 재 비		48,295,390	45,163,820	감 3,131,570

예산확보 :본공사 낙찰차액 예산사용

5		행 정 사 항

「2016년 서울대공원 등산로 정비공사」 추진 중

❍ 설계변경사항은 원활한 공정관리 및 공사추진을 위해 시공사로 하여금 현장여건에 맞게 선 시공 조치하고,

설계변경에 따른 소요예산 조치는 본공사 낙찰차액 활용

붙임 : 1) 변경설계 내역서 1부.       2) 제비율 검증결과 1부.   끝.