서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역 변경 계획

『남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역』과 관련하여 남산 TF팀 회의 개최 등으로 용역기간을 연장하고자 합니다.

1. 용역 개요

가. 용역명: 남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 기본구상용역

나. 용역기간: 2016. 4. 14. ～ 6. 17.

다. 용역기관: 디자인밴드요앞 건축사사무소

라. 계약금액: 금18,680,000원

2. 변경 사항

가. 용역 계약기간 변경: 20일 연장

- 당초: 2016. 4. 14. ～ 6. 17.

- 변경: 2016. 4. 14. ～ 7. 7.

- 사유: 남산 TF팀 회의 개최

나. 용역금액 변경: 변경 없음

3. 행정사항

가. 계약상대자와 변경내용 합의

나. 용역변경계약 의뢰(재무과).  끝.

주무관	김동욱		도성관리팀장	이희향		한양도성도감과장	06/15 심말숙
협조자
시행	한양도성도감-5722	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관1동 5층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2674	/전송	02-2133-1063	/	donguk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)