투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설공사)

우리 사업소에서 시행중인 구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설공사를 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설공사

2. 공사기간 : 2015. 10. 16 ~ 2016. 06. 20

3. 공사개요 : 무근콘크리트깨기 95㎥, 아스팔트포장깨기 108㎥, 아스팔트절단                                326m, 아스팔트 포장 5.62a, 보도포장 5.47a, 경계석 설치 370m,                                  차선도색 6,882m, 차선제거 5,284m 등

4. 도 급 자 : ㈜자운이앤씨 대표 성하범

5. 변경사유 : 실시공 물량 및 제경비 정산

6. 변경내역

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
도급비	공 급 가 액	259,500,000	237,100,000	감) 22,400,000
	부가가치세	25,950,000	23,710,000	감) 2,240,000
	계	285,450,000	260,810,000	감) 24,640,000

7. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용

차로흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	06/15 신현태
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-5837	(		)	접수		(		)
우	07520		/
전화		/전송		/		/	대시민공개