투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역)

우리 사업소에서 시행중인 중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 :  중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역

나. 용역사 :  금강도시환경주식회사 대표이사 이상훈

다. 용역비 :  금8,778,000원

라. 기  간 : ’15.10.12 ~ ‘16.06.20

마. 개   요 :

- 폐기물운반(당초 : 257㎥, 변경 : 387㎥)

- 폐기물처리(당초 : 228ton, 변경 : 320ton)

바. 변경사유 : 단순물량 증.감

사. 변경내역                                     (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
용 역 비	공 급 가 액	금7,980,000원	금11,740,000원	금3,760,000원
	부가가치세	금 798,000원	금 1,174,000원	금 376,000원
	계	금8,778,000원	금12,914,000원	금4,136,000원

아. 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙

버스전용차로 흐름개선, 시설비

따로붙임 :  1. 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의서 1부 끝.

	도로보수과장
주무관	김동민		도로보수과장	06/15 김권일
협조자	주무관	정안숙
시행	도로보수과-5836	(		)	접수		(		)
우	07520		/
전화		/전송		/		/	대시민공개