문서번호	녹지관리과-2486
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
장창수	代장창수	06/16 장상규

- 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역 -

준공기한 연기 검토보고

2016. 6

녹지관리과

- 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역 -

준공기한 연기 검토보고

한강공원의 경관을 향상시키고 자연성회복을 위하여 시행중인 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

▢ 용역현황

○ 용 역 명   : 2016년 고수호안 녹화사업 기본 및 실시설계 용역

○ 계약업체   : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학

○ 계약금액   : 금36,204,000원

○ 계약년월일 : 2016. 03. 09

○ 착수년월일 : 2016. 03. 09

○ 준공기한   : 2016. 06. 17

▢ 검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 한강공원 고수호안 전체에 대한 현황분석 및 개선방향 검토 등에 상당한 시일이 소요되어 부득이하게 준공기한을 연기

○ 준공기한 연기

┏ 당  초 : 2016. 03. 09 ~ 06. 17

┗ 변  경 : 2016. 03. 09 ~ 08. 31

○ 연기사유 귀책소재 : 발주처

○ 배상지연금 부과여부 : 미부과

▢ 검토의견

○ 한강공원 고수호안 전체에 대한 현황분석 및 개선방향 검토 등에 상당한 시일이 소요되는 사항으로 부득이하게 상기와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 준공기한 연기요청 공문 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.