문서번호	도시철도토목부-7580
결재일자	2016.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
성원배		윤방식	06/16 김진팔
협 조
	주무관			최경호

서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 감독권한대행등 건설사업관리기술자 배치계획 변경 검토 보고

2016. 6.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 감독권한대행등

건설사업관리기술자 배치계획 변경 검토 보고

지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구)가‘16.06.13 착공됨에 따라 안전, 품질, 공사 등의 업무 수행을 위하여 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 건설사업관리기술자 배치계획 변경 및 상주기술자 투입 승인 요청에 대하여 검토보고 드림

- 관련문서 : 배치계획 변경 및 투입 승인 요청<동명궤감 2016-5호(2016.06.08.)>

□ 계약현황

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 용역 위치 : 서울시 송파구 방이동(올림픽공원 남4문)~강동구 둔촌동(보훈병원)

○ 용역 규모 : 궤도부설 L=10.084km, 분기기 부설 12틀

○ 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 1개사

- 계약금액 및 용역기간

구 분	총 차	1차(진행중)	2차	비고
계약 금액	959,516,000원	380,000,000원	579,516,000원
용역 기간	2016.04.04.~ 2017.10.03.	2016.04.04.~ 2016.12.31.	2017.01.01.~ 2017.10.03.

□ 현안사항

○ 궤도공사(2공구)가‘16.06.13. 착공됨에 따라 건설사업관리 업무수행을 위한 건설사업관리기술자 배치계획 조정 필요.

- 궤도공사(2공구)가‘16.06.13. 착공됨에 따라 안전, 품질, 공사 등 건설사업관리를 위한 건설사업관리기술자 배치계획은 궤도공사 공정에 맞게 조정하여 투입 필요

□ 검토내용

○ 건설사업관리기술자 배치계획 변경 검토

- 토목분야(921, 922, 923공구) 집중 인계․인수 및 자재 수급․검수․시험·투입, 용접, 주요 공종인 도상타설을 위한 타 분야와의 업무협의, 안전, 품질, 궤도검측업무 등으로 건설사업관리기술자 추가 투입이 필요한 실정이므로

- 현장 여건 등을 감안한 효율적 건설사업관리운영을 위하여 용역계약 범위 내에서 건설사업관리기술자 배치계획을 조정하여 궤도공사관리

○ 건설사업관리기술자 배치계획 조정 및 용역비 산정

- 배치계획 조정                                     (단위 : 월/인)

구 분	총차		1차(진행중)		2차		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
계	64.30	64.30	23.90	28.17	40.40	36.13	총 투입인원 증감 없음
책임	18.00	17.91	9.00	8.82	9.00	9.09
분야별	46.30	46.39	14.90	19.35	31.40	27.04
증 ․ 감	변동 없음		증 4.27		감 4.27

• 2016.06 : 2명 투입(중급 1, 초급 1)

• 2016.08 : 1명 계획(초급 1)

※ 기술지원기술자(철도, 안전)는 변동(증감) 없음

- 용역비 산정

구 분		총차	1차(진행중)	2차	비 고
용역금액	당초	959,516,000원	380,000,000원	579,516,000원	총 용역비 증·감 없음
	변경		430,000,000원	529,516,000원
용역기간	당초	2016. 04. 04. ~ 2017. 10. 03.	2016. 04. 04. ~ 2016. 12. 31.	2017. 01. 01 ~ 2017. 10. 03.	변경 없음
	변경

□ 조치의견

○ 계약된 범위내에서 건설사업관리기술자 배치계획을 궤도공사 공정에 맞게 조정하여 공사관리에 만전을 기하도록 건설사업관리기술자 투입을 승인하고자 하며,

○ 건설사업관리용역 기술자 배치계획 조정 및 투입에 따른 조정 내역은 향후 변경 계약시 반영하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리용역 기술자 배치계획 변경 및 투입 승인 요청문 1부.

2. 검토의견서 및 건설사업관리단 운영계획  각 1 부.

3. 상주기술자 투입계획 관련 서류.         각 1 부.  끝.