투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	구리시장(도시과장)
(경유)
제목	구리 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 기간 연기 보완 제출

1. 토목부 - 11239호(2016. 6. 2.) 및 구리시 도시과 - 7009호(2016. 6.13.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 구리 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 기간연기 요청 사항 중 접속도로(중로3-1호선 및 중로3-26호선)에 대해 다음과 같이 보완 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.  구리 도시계획시설(도로) 접속도로 중 중로 3-1호선은 공사가 완료되어 현재 공용 중에 있고, 구리∼포천고속도로 민간투자사업과 일부 중첩구간의 공사시기가 도래됨에 따라 귀 시 협의 의견(도시과 - 6068호, 2016.5.23.)과 양 사업간 원활한 사업추진을 위해 준공인가 등 행정절차를 이행하고 있으며.

나. 중로 3-26호선은 그 간 귀 시 도로관리부서(건설과) 협의내용에 따라 공사를 진행하던 중 공사 중지 요구 등 민원이 제기되어 부득이 공사가 중지됨에 따라 기간연장을 요청한 사항이오니 원활하게 사업이 추진될 수 있도록 적극적인 협조를 재요청드립니다.     끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한병찬		광역도로과장	代한병찬		토목부장	06/17 김영수
협조자
시행	토목부-12359	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	대시민공개