문서번호	설비부-9621
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		여인웅	06/17 권오식
협 조
	주무관			이호기

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

협잡물 야적장(전기) 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

협잡물 야적장(전기) 설계변경 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 」과 관련하여 감리단이 제출한 협잡물 야적장 전기분야 실정보고 사항에 대한 검토 보고 임.

Ⅰ				공사개요

○ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

○ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

○ 공사기간 : 2012.11.15.~ 2016.06.30.

○ 공사금액 : 금73,200백만원(도급비 63,516백만원)

○ 계약업체 : 대림산업(주) 외2

Ⅱ				관련근거

○ 서분감 제2016-251(2016.06.14.)  전기분야(보관장 전력인입 추가) 설치

공사 변경 실정보고 검토보고

Ⅲ				실정보고 검토내용

○ 설계변경 대상 금액 현황                      (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감
협잡물 야적장 전기공사 금액	순공사비	0	102,201	102,201
	경비	0	50,964	50,964
	도급비	0	153,165	153,165

○ 설계변경 주요 내용

- 사유 : 협잡물 야적장 내부에 탈취설비 설치에 따른 전기설비 설치

※ 물재생시설과 요구사항

- 주요내용 : 동력간선 인입공사

구 분	규 격	당 초	변 경	증 감	비고
파상형경질폴리 에틸렌 전선관	ELP 65mm 외 4종	0m	352m	증) 352m
0.6/1kV난연비닐시스 트레이용 케이블	F-CV 4C 35㎟ 외 3종	0m	2,371m	증) 2,371m
분전반 개량	메인차단기 등	0개소	1개소	증) 1개소
관로터파기(ASP)	1,200H	0㎥	166㎥	증) 166㎥
맨 홀	1,000x1,000x1,000	0개소	5개소	증) 5개소

○ 감리원 검토의견

- 서남물재생센터 철거대상인 기존분뇨처리장 전기실에서 전기를 공급받은 협잡물 야적장 동력설비를 소각동에서 공급하는 방안으로 설치 하는 것이 타당함.

- 협잡물 야적장 동력설비 전력 공급을 변경하는 것으로 우선 시행하고 공사비는 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령” 제103조 규정에 따라 공사 금액을 반영하여 계약금액을 증액하는 것이 타당함.

Ⅳ				보고자 의견

○ 책임감리원이 제출한 설계변경 실정보고 내용을 검토한 바,

- 발주기관 요청에 의한 추가공사에 따른 설계변경 사항으로 공사           계약 일반조건등 관련규정에 적합하므로 계약금액 증액(153,165           천원) 설계변경 실정보고를 승인코자 합니다.

따로붙임 : 1.전기분야(보관장 전기인입 추가) 설치공사 변경 실정보고 검토보고. 끝.