	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강동소방서 심신안정실 공사 변경계약 체결 보고

1. 강동 소방행정과-7257(2016.6.16.)호“심신안정실 공사 설계변경 실정보고”와 관련입니다.

2. 우리 서 심신안정실 공사 중 천정철거에 따른 석면텍스 처리 등으로 추가 공사를 위한 변경계약이 아래와 같이 체결되었기에 보고합니다.

가. 공 사 명 : 심신안정실 설치 공사

나. 계 약 액 : *****************************

**********************************************

다. 계 약 일 : 2016. 6. 16.

라. 공사기간 : 2016. 6. 2. ~ 6. 26.(당초 6.16일에서 6.26일로 11일연장)

마. 계약업체

- ********************************************

- *************************************

바. 예산과목 : ************************************************

사. 대가지급 : 준공검사 완료 후 계좌입금

붙임 공사변경 계약서 1부.  끝.

담당자	김기범		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	손문종		소방서장	06/17 이영우
협조자
시행	소방행정과-7402	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-1233	/전송	02)483-1190	/	kkb5630@seoul.go.kr	/	부분공개(7)