함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	위례신도시 임시급수 공급체계 변경 계획 송부 및 협조요청

1. LH공사 서울위례단지사업1부-3579호(2016.6.2.)와 관련입니다.

2. 『위례신도시 급수공급』과 관련하여 사업시행자인 귀 공사로부터 임시급수 공급체계 변경요청이 있어 아래와 같이 공급체계를 변경하고자 하오니 위례신도시의 급수공급이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 위례신도시 임시급수 공급체계 변경

- 임시급수 변경 ┏ 현 재 : 광암정수장 수계 ⇒ 위례신도시

┗ 변 경 : 암사(저양정) 수계 ⇒ 위례신도시

- 급수체계 변경을 위한 추진조건

① 공급체계를 암사정수장으로 변경시 암사의 생산량 부담이 커서, 우선 타 정수장(뚝도)의 생산량을 증가시켜 암사 자체 생산량 일부를 감소 시킨 후 위례신도시 급수체계를 변경 할 예정임

② 공급체계 변경에 따라 암사계통 관로에 신설 유량계 설치 필요

┏ 유량계 설치 : LH공사

┗ 기존 급수구역 우회관로 설치 : 서울시 상수도사업본부

- 추진일정

▶ 뚝도 생산량 증대 및 암사 생산부담 감소	’16. 7.1. ~ 7.11.

▶ 급수체계 전환을 위한 시설물 합도점검	’16. 6.22.

▶ 암사(저양정) 공급관로 서서히 수계전환 시행	’16. 7.1. ~ 7.8.

▶ 암사(저양정) 공급계통으로 전환 완료	’16. 7.11. ~ 7.15.

▶ 유량계, 퇴수밸브 설치, 공급관로 2개소 연결시행	’16. 7. ~ 8.

◈ LH공사 협조 요청사항

- 임시급수 변경 관련 유량계 설치(비용부담 : LH공사)

- 조속한 시일내 유량계를 최우선 설치하고, 유량계 설치전 공급체계 변경시에는 강동수도사업소와 협의 후 처리

- 변경된 임시급수 계획에 따라 우리본부 대외협력과와 임시급수 협약(변경) 체결

- 현재 위례신도시 관련 서울시, 하남시, LH공사간 시설물 설치, 유지관리 방안, 공사방법 등의 의견차가 있으므로 조속한 시일내 관련부서 합동회의 개최토록 조치. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	06/17 이규상
협조자
시행	배수과-5370	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개