문서번호	방재시설부-9197
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	06/17 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

하수암거 보강 시공 검토보고

2016. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

하수암거 보강 시공 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 기존 하수암거와 신설하수암거 연결부구조 안정성검토에 따른 하수암거 보강 시공에 대한 시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2016. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 7,747백만원

실정보고 및 검토내용

❍ 기 승인된 기존암거 구조안정성 검토결과에 따른 하수암거 보강시공 및

강재차수벽 설치에 따른 사항임

- 추진경위

1) 현장타설암거(T-1) 규격 및 형식 변경 설계사에 검토요청

→ 공사감독2처-2140호(2016.04.12)

2) 기존관거의 안정성 검토 필요 회신

→ 도화(수자원)-2016-A20-0318호(2016.04.12)

3) 구조안정성 검토보고 발주처 제출

→ 공사감독2처-5261호(2016.06.07)

4) 구조안정성 검토보고 승인

→ 방재시설부-8818호(2016.06.13)

5) 구조안정성 검토에 따른 보강공법 도급사로부터 접수

→ 공릉16-00호(2016.06.14) : 보강공법 및 차수벽 상세도

전체 평면도
연결부 상세도	박스 연결부 기존박스 차단 중벽 철거구간

감리검토내용

❍ 기존 하수암거의 벽체 절단에 따른 구조안정성 검토가 누락된바 구조안정성 검토와 검토결과에 따른 기존암거 보강공사가 필요하고,

❍ 유역분리에 따른 하수암거에 차수벽(강재) 설치가 적정할 것으로 판단됨

- 개략공사비 : 증) 약 48백만원

보고자 의견

❍ 상기 내용을 검토한 결과 서울시시설관리공단 위탁감독 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함

붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고 검토서 1부.

2. 내역서 등 관련자료 1부. 끝.