문서번호	문화정책과-8451
결재일자	2016.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	문화관리팀장	문화정책과장
승효선	박인숙	06/17 박대우

용역기간 연장계획 (홍대입구역 지하보도 정밀안전진단)

2016년 6월

문 화 본 부

(문화정책과)

용역기간 연장계획 (홍대입구역 지하보도 정밀안전진단)

홍대입구역 지하보도 정밀안전진단 용역에 대하여 심도 있고 충실한 조사를 위해 용역 기간을 연장하고자 함

용역개요

□ 용 역 명 : 홍대입구역 지하보도 정밀안전진단 용역

□ 계약업체 : ㈜세기 안전진단

□ 계약금액 : 금 18,893,000원정(￦금 일천팔백팔십구만삼천원정)

□ 계약기간 : 2016. 5. 4. ~ 2016. 6.22.

추진경위

□ 착수보고     : ’16. 5. 9.

□ 지하보도 개구부 설치를 위한 굴착지점 조사 : ’16. 5.23.

□ 유관기관 협의 실시 : ’16. 6. 9.

- 수직구 구간에 지장물(통신관로, 가스관) 저촉에 따른 유관 부서 및 기관 협의 실시

연장내용 및 사유

계약금액	변경 없음
계약기간 변경 (50일 연장)	당 초	’16. 5. 4. ~ ’16. 6.22.
	변경후	’16. 5. 4. ~ ’16. 8.16.
과업내용 변경	변경 없음
기간변경 사유	굴착과정에서 지하매설물 저촉으로 유관부서 및 기관과의 협의기간 반영, 법적 검토를 포함한 성과물의 심도있는 조사를 위하여 용역기간 추가 필요 ‣*********************************************************************************** ************ ‣**********************************

향후계획 : 재무과에 계약변경(용역기간 연장) 요청

붙임 : 합의각서 1부.  끝.