투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	회의 개최 결과 및 추진계획 알림(서남분뇨처리시설)

1.『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』관련입니다.

2. 2016.6.16.(목) 개최한 2차시운전 및 기존시설 철거관련 관계자 회의결과를 송부하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 드럼스크린 추가설치 등 공사일정상 향후 추진계획을 알려드리니 양지하여 주시기 바랍니다.

가. 드럼스크린 반입설치 : 6.17~6.23, 시운전 6.23부터

나. 2차 종합시운전 : 6.27(월)부터 2개월

다. 기존시설 철거 : 6.27(월)부터

- 기존 구조물 비우기 : 6.23~7.20

- 석면 및 기전시설 철거 : 7.4~7.21

- 토양탈취동 철거 : 6.27~7.10

- 투입동 등 철거 : 7.22~9.25

- 조경공사 : 9.26부터

라. 공사완료 : 2016.10월말 예정.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장),(주)서남환경
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	06/17 권오식
협조자
시행	설비부-9615	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개