문서번호	토목부-12344
결재일자	2016.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		代한병찬	06/17 김영수
협조

교량안전점검 및 측량비 반영 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2016. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교량안전점검 및 측량비 반영 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

서울시와 부천시간 설치된 가족길교에 대하여 경계측량을 통해   시계를 명확히하고 관련 법에서 정한 정밀안전점검 비용을 반영하고자 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2016. 6.30. (총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사  ㈜수성엔지니어링

○ 공 정 율 : 95.5%, 도로 표층 포장 준비중

실정보고

○ 기족길교 정밀점검 비용 및 경계측량비 반영필요

- 서울시와 부천시간 설치된 가족길교에 대하여 경계측량을 통해 시계를 명확히하여 시설물 인수인계시 활용

- `15.10 기설치된 가족길교에 대하여 시설물 인수인계전 시특법에서 정한   정밀안전점검 추진 필요

○ 물량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
교량안전점검비	정밀안전점검	식	-	1	1
측량수수료	경계측량	식	-	1	1

○ 사업비 검토                                             (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
6. 부 대 공
제경비제외	-
교량안전점검비	-	16,695	16,695
측량수수료	-	2,023	2,023
공 급 가 액	-	18,718	18,718
부 가 가 치 세	-	1,872	1,872
도 급 액	-	20,590	20,590

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(92.75%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 시공사와 강제협의율(92.75%) 적용 협의완료

검토결과

○ 비용반영에 따른 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.