투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철9호선3단계 시스템분야 책임감리원
(경유)
제목	9호선연장(3단계) 2구간 제1차 송변전공사 설계변경 시행 통보

1. 서지9-3시감 제16-169호(2016.06.09.)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여『서울지하철 9호선연장건설(3단계) 2구간 제1차 송변전공사』설계(내역)변경를 시행 하였사오니 계약관련 행정절차 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선연장건설(3단계) 2구간 송변전공사(제1차)

나. 공사규모 : 본선 3.2km, 수전선로 3.35km, 변전소 1개소, 연락송배전 3.96km(전기실 4개소)

다. 공사기간 : 2015.09.02 ~ ‘18.02.17 (1차 : 준공기한- ’16.08.31)

사. 설계변경 내역 : 계약금액 변동 없음

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
1차 (금회)	1,000,000,000	1,000,000,000	증감 없음
총 차	4,703,036,098	4,703,036,098	증감 없음

※ 설계변경 사유 : 한전 수전 관로(임대) 협의 및 현장여견 변화에 따라

내역변경( 1차 ↔ 총차)

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 06/20 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6472	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	부분공개(7)