문서번호	도시철도설비부-6545
결재일자	2016.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김대홍		김영하	06/20 정찬웅
협조

서울지하철 9호선 3단계 신호공사용 케이블트레이 납품기한 연기 검토 보고

2016. 6.

서울지하철 9호선 3단계 신호공사

케이블트레이 납품기한 연기 검토 보고

※ 서지9-3시감 제16-181호(2016. 6. 20.) “알루미늄 케이블트레이 및 부속자재 구매 납품기한 연장 실정보고”

9호선 3단계구간 선행 토목공정 지연으로 신호공사 관급자재인 알루미늄 케이블트레이 납품기한을 연기하고자 함.

I		구매 개요

계약건명 : 9호선 3단계 신호공사 알루미늄 트레이 및 부속자재 구매

계약기간 : `15. 11. 19. ～ `16. 7. 30.

계약금액 : 422,316,400원

계 약 자 : ㈜광명이엔지 대표 정 윤 석

구매물품 : 알루미늄 케이블트레이[200×100×2.0t] 외 16종

II		감리 검토내용

검토배경 : 케이블트레이 시공구간 본선터널굴착 지연

* 919공구 931S1환기구 ~ 932정거장 2017.03 굴착완료예정

검  토 : 토목공정률 고려 납기연기(`16. 7. 30. → `17. 5. 31.)

구분	2015		2016												2017
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
당초
변경

III		조치 의견

납품기한 연기

구분	당 초	변 경	증 감
납기	`16. 7. 30.	`17. 5. 31.	+10개월

연기사유 : 케이블트레이 시공구간 본선터널굴착 지연

지체상금 : 면제(발주기관 귀책)

iV		행정 사항

`16. 6. 21. : 건설총괄부로 납기연장 요청 공문시행

붙임 : 감리단 문서 사본 1부.  끝.