함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	급수공사 기한연기(등촌로13나길 *****, 등촌동 *****, 신설1)

1. 시설관리과-14189(2016.06.09.)호 관련입니다.

2. 강서구 등촌동 *****호 급수공사 관련 아래와 같이 작업기간을 연기하고자 합니다.

가. 작업개요

- 지시번호 : 신설-1

- 공사내용 : 신축급수공사(D25mm * 2)

나. 작업기한 연기

- 사    유 : 신축건물 공사지연(현장 자재적치) 수요가측 연기요청

- 기    간 : 당초 2016. 06. 13 ~ 2016. 06. 22

변경 2016. 06. 22 ~ 2016. 07. 30

붙임 : 관련공문 및 작업지시서 1부.  끝.

주무관	오승미		시설관리과장	06/20 代김근용
협조자
시행	시설관리과-15238	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4009	/전송	3146-4039	/	dimple0403@seoul.go.kr	/	부분공개(6)