서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역계약 변경요청(홍대입구역 지하보도 정밀안전진단)

1. 문화정책과-8451호(2016.6.17)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 용역계약건에 대하여 아래와 같이 변경요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 홍대입구역 지하보도 정밀안전진단용역

나. 계약업체 : ㈜세기안전정밀

다. 계약금액 : 금 18,893,000원

라. 변경사항 : 용역기간 연장

구 분	변경 전	변경 후
계약기간	’16. 5. 4~’16. 6.22.	’16. 5. 4. ~ ’16. 8.16.

붙임  1. 계약기간 연장계획 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	문화정책과장
주무관	승효선		문화관리팀장	박인숙		문화정책과장	06/20 박대우
협조자
시행	문화정책과-8536	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-2527	/전송	02-2133-1059	/	shs1919@seoul.go.kr	/	부분공개(6)