투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약-한강르네상스호 난간 보수 용역

1. 수상안전과-2336(2016.5.30.)호와 관련 입니다.

2. 수상안전과에서 시행중인 『한강르네상스호 난간 보수 용역』계약을 아래와 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	한강르네상스호 난간 보수 용역
계약상대자	조이웰더텍 (대표 : 오형옥)
계 약 금 액	금10,307,000원(금일천삼십만칠천원정), 부가세 포함
계 약 일 자	2016. 5.10.
공 사 기 간	2016. 5.10. ~ 2016.05.24.

나. 변경내역 : 공사기간 변경

변 경 내 역	변 경 전	변 경 후
공 사 기 간	2016. 5.10. ~ 2016.05.24.	2016. 5.10. ~ 2016.05.28.

다. 변경사유 : 한강르네상스호 운항스케쥴로 인한 공사 지연

첨부 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	이규옥		총무과장	06/21 박병현
협조자
시행	총무과-10466	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개