문서번호	기전과-6582
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
호정오		양영민	06/21 배광환
협조

교통신호기 신설 및 보수사업

예산 추가 재배정에 따른 사용계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  6.

서부도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 신설 및 보수사업

예산 추가 재배정에 따른 사용계획

교통신호기 신설 및 보수사업 예산 추가 재배정에 따른 사용계획을 아래와 같이 수립시행하여 예산의 효율적 사용 및 교통신호기 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관 련 근 거

□ 교통운영과-10627호(2016.6.10.)

○ ‘16년 교통신호기 신설 및 보수사업 예산 추가 재배정

- 재배정금액: 814,035천원

2		예 산 현 황

□ 2016.6.21. 현재 지방재정관리시스템(e-호조)

○ 예산(재)배정액: 2,384,275,000원

- 기배정액: 1,570,240,000원

- 추가 재배정금액: 814,035,000원

○ 기원인행위액: 1,532,642,100원

○ 지출품의가능액(사용가능액): 851,632,900원

3		사용방안 검토

□ 교통신호기 연간단가 공사(1지역, 2지역, 신설)

○ 교통안전시설 심의내용 처리, 노후지주 교체, 서울지방경철청의        교통신호제어기 교체 요청, 민원 및 고장 등 긴급보수 시행

○ 도로굴착심의 접수를 위한 현장조사, 도로굴착복구 신청 및 허가,       도로공사 신고 등 관련기관 협의 후에 12월까지 시행 및 준공을       하여야 하므로 진행 중인 연간단가 공사에 작업지시하여 조속히       시행하는 것이 타당하므로 설계변경이 필요(증액)

□ 관급자재 구매(조달)

○ 교통신호제어기 구매

- 노후 교통신호제어기 교체 요청: 교통운영과-1391호(2016.1.25.)

- 교통신호제어기 교체 요청: 교통관리과-6787호(2016.03.16.)

○ 교통신호등 구매(보행등, 경보등, 버스삼색등)

- 중앙버스전용차로 버스삼색등 설치계획 통보

․교통운영과-5565호(2016.3.28.)

- 교통안전시설 개선설치 통보(하달)[버스삼색등]

․교통관리과-13452호(2016.05.17.)

- 그 외 교통신호등은 심의내용 처리 및 유지보수를 위하여 구매

4		예산 사용계획

□ 지출품의가능액: 851,632,900원

○ 교통신호기 연간단가 공사(1지역, 2지역, 신설): 630,000,000원

- 1지역: 200,000,000원

- 2지역: 200,000,000원

- 신 설: 230,000,000원

○ 관급자재 구매(조달): 95,000,000원

- 교통신호제어기 15대: 75,000,000원

- 교통신호등(보행등, 경보등, 버스삼색등): 20,000,000원

○ 이전비(도로굴착복구비, 검사비 등): 126,632,900원

5		행 정 사 항

□ 교통신호기 연간단가 공사(1지역, 2지역, 신설) 설계변경

○ 1지역: (당초) 454,455,660원 → (변경) 655,000,000원

○ 2지역: (당초) 451,984,910원 → (변경) 655,000,000원

○ 신 설: (당초) 455,433,930원 → (변경) 699,000,000원

- 감리업체 설계변경 업무지시: 2016.6.22

- 감리업체 설계변경 제출 후 설계변경 시행: 2016.6.29

- 변경계약 후 교통신호기 연간단가 공사 작업지시: 2016.7.11

□ 관급자재 구매(조달)

○ 교통신호제어기 구매: 2016.6.23

○ 교통신호등 구매(보행등, 경보등, 버스삼색등): 2016.6.23.  끝.