문서번호	주차계획과-7926
결재일자	2016.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	06/21 윤보영
협조

마포중앙도서관 공영주차장 건설 (마포구) 예산교부 검토

2016. 6.

도시교통본부

(주차계획과)

마포중앙도서관 공영주차장 건설 예산교부 검토

마포구에서 추진중인『마포중앙도서관 공영주차장 건설사업』관련 ‘16년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 마포 성산동 275-3 외 4 (舊 마포구청사, 10,754㎡)

○ 규    모 : 지하3~지상4층, 연면적 20,153㎡

- 주차장 : 105면 (지하1~지하2층, 연면적 4,080㎡)

- 도서관 및 청소년센터 등 : 지상1~4층,지하3층, 연면적 16,073㎡

○ 총사업비 : 48,379백만원

- 주차장 : 7,086백만원 (시비 3,180백만원, 구비 3,906백만원)

- 도서관,교육비전센터 : 41,293백만원 (국비 6,521, 시비 13,605, 구비 8,167, 민자 13,000)

구 분	총사업비 (주차장)	투 자 계 획			비고
		‘15	‘16	‘17
계	7,086	3,906	3,180	-
시 비	3,180	-	3,180	-
구 비	3,906	3,906	-	-

○ 사업기간 : ‘15.10 ~ ‘17.10

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘13.3.29 : 마포종합교육지원센터 건립계획 수립

○ ‘13.4~6 : 타당성조사 및 기본계획 연구용역(한국경영경제문제연구원)

○ ‘13.5~7 : 건립부지 지반조사 용역

○ ‘13. 7.4 : (가칭)성산공영주차장 건립 방침

○ ‘13.8.27 : 시 투자심사(조건부: 국비확보)

○ ‘14.3.21 : 중앙 투자심사(조건부: 유지비용 최소화 위해 수익시설 유치방안 마련 등)

○ ‘14.10~’15.6 : 기본 및 실시설계 용역시행

○ ‘15.5.20 : 지방재정 중앙투자 2단계 심사 통과(적정)

○ ‘15.10.8 : 건축공사 계약(양우건설)

○ ‘15.10.23 : 건설사업 관리용역 계약 (토문엔지니어링)

○ ‘15.11.4 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 증축계획 수립

○ ‘15.12 : 전기공사 및 전기소방공사, 통신공사 계약

○ ‘16.3.4 : 증축 설계용역 계약 (해마종합건축사 외 2)

○ ‘16.4.14 : 토목공사(터파기 등) 완료 (공정 28%, 현재 골조공사중)

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 마포중앙도서관 공영주차장 건설 예산 교부 요청

- 관련공문 : 2016년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 마포구 교통행정과-10009호 (‘16.3.7)

□ 주차장 분야별 사업비                           (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비고
계		7,086	3,180	3,906
보상비	보 상	-	-	-	-
설계용역	설계용역	270	-	270	‘15.5~9
공사발주	토목․건축	6,536	3,180	3,356	‘15.10~
	전 기
	소방․전기
	통 신
	기 계
감리비	시공감리	280	-	280	‘15.10~

□ 예산배정 검토(주차장건설)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘15년이전	‘16년			‘17년~	비고
			계	기배정	금회배정
계	7,086	3,906	3,180	-	3,180	-
시 비	3,180	-	3,180	-	3,180	-
구 비	3,906	3,906	-	-	-	-

□ 요청 사유

○ 공사비,용역비,감리비 등 우선 구비로 투입중으로 잔여 2,3차공사 계약을 위한 소요예산 확보 등에 따른 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 투자심사 조건인 국비확보 등 조건 충족

○ 현재 지하1층 및 지하2층 기초공사 진행중으로 추진일정에 따라 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단되며

○ ‘16 하반기 잔여 2,3차 건설공사 발주에 필요한 시비 3,180백만원 요청하는 사항으로 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

붙임: 1. 예산교부 요청공문 1부.   끝.

공사현장 전경사진 (‘16.6.16일 현재)

지상2층~지하2층 골조공사

지상2층~지하2층 골조공사