서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역)

우리과에서 시행 중인「삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역

나. 계약자 : ㈜서우티이씨

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2016. 6. 29

- 변 경 : 2016. 8. 29

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : 길음역사거리 교통정체 개선 방안 및 자치구(성북구, 강북구)와 도로확장 방안 협의를 위한 준공기한 연기 필요

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서.

2. 준공기한 연기 방침서.

3. 합의각서. 끝.

	도로계획과장
주무관	박종찬		도로시설계획팀장	한정무		도로계획과장	06/21 하종현
협조자
시행	도로계획과-8562	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개