투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(가산2빗물펌프장 유수지복개 기본 및 실시설계용역)

1. 우리본부에서 시행중인 「가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역

나. 도 급 비 : 207,504천원

다. 도 급 자 : (주)이산  대표 이원찬

라. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2014.12.29.~2016.6.30	2014.12.29.~2016.10.31

○ 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 준공기한 검토보고서 참조

바. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로관리(6개도로사업소), 사업소 환경개선,

남부도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	06/21 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-9399	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌등 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개