문서번호	급수운영과-14879
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	06/21 오기석
협조

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

관급자재(자기질타일) 소운반비 검토보고

2016.  6.

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

관급자재(자기질타일) 소운반비 검토보고

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련, 관급자재 (자기질타일) 소운반비에 대한 검토 보고임.

※이준 016-56(2016. 6.20)호와 관련 임.

공사개요

❍ 공사규모

ㆍ그라인딩 : 8,961.9㎡

ㆍ바탕고르기 : 6,292.8㎡(벽면 3,619.8㎡, 바닥 2,673㎡)

ㆍ타일압착 붙임(벽면, 바닥)  : 5,827,7㎡

ㆍ폴리우레아 도막방수(천정)  : 2,669.1㎡

ㆍ기타 균열보수 등 : 1식

❍ 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 06. 30.

❍ 공 사 비 : 896,866천원(도급비 645,715천원, 관급비 248,229천원)

❍ 시 공 사 : 솔바로건설(주)

현황 및 문제점

❍ 관급자재인 자기질타일은 자재시방서에 의하면 납품자부담으로 공사현장 지정장소에 운반토록 되어 있으며 현장에서 발생된 소운반은 수급인 부담으로 되어 있음.

❍ 가압장입구에서 1-3항 진입계단부까지 1,650mm 상수도관이 설치되어 있어 차량 및 리어카 등이 진입할 수 없으므로 항 내부 현장까지 인력으로 자재를 운반할 수 밖에 없음.

❍ 자재 전체 운반거리는 125m임.

▸가압장입구~항 진입계단 전 : 79m, 진입계단~항 내부계단 : 19m, 현장내 1항 시점~4항 종점 : 27m(54m/2)

관급자재 현황

❍ 자기질타일 : 5,055㎡(중량 : 16.666kg/㎡)

⇒ 관급자재 중량 : 5,055×16.666 = 84,246.6kg(84.24ton)

처리의견

❍ 현장 여건상 가압장입구에서 항내 현장까지 인력으로 자재를 운반할 수 밖에 없는 실정으로 전체 운반거리 125m를 반영하여야 하나

❍ 현장에서 발생된 소운반은 수급인 부담으로 한다는 자재시방서에 따라 가압장입구~1-3항 진입계단전까지 거리인 79m에 대해서만 소운반적용을 제시한 사업관리기술자 검토의견을 설계변경시 반영하고자 함.

따로붙임 : ㈜이준엔지니어링 실정보고서 1부. 끝.