문서번호	급수운영과-14867
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	06/21 오기석
협조

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

계단타일 및 도류벽상단 추가물량 검토보고

2016.  6.

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

계단타일 및 도류벽상단 추가물량 검토보고

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련, 항 내부 출입계단 및 도류벽 상단 타일부착 추가에 따른 검토 보고임.

※이준 016-56(2016. 6.20)호와 관련임.

공사개요

❍ 공사규모

ㆍ그라인딩 : 8,961.9㎡

ㆍ바탕고르기 : 6,292.8㎡(벽면 3,619.8㎡, 바닥 2,673㎡)

ㆍ타일압착 붙임(벽면, 바닥)  : 5,827,7㎡

ㆍ폴리우레아 도막방수(천정)  : 2,669.1㎡

ㆍ기타 균열보수 등 : 1식

❍ 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 06. 30.

❍ 공 사 비 : 893,944천원(도급비 645,715천원, 관급비 248,229천원)

❍ 시 공 사 : 솔바로건설(주)

현황 및 문제점

❍ 급수운영과-6704(‘2016.03.22.)호에 의거 분야별 실측 물량을 적용하였으나 도류벽(2지) 상단 및 하단거더 측면의 실측물량 당시 누락

❍ 1-3항 출입 및 내부계단 논슬립 타일붙임 당초 설계에 미 반영

추가물량 및 공사비 현황

구 분	단위	물 량		공 사 비 (천원)	비 고
		당 초	변 경
도류벽상단 및 하부더거 측면	㎡	-	43	1,281	누락(도류벽 2개소)
1-3지 진입 및 내부계단	㎡	-	27	586	설계 미반영

처리의견

❍ 도류벽 상단 및 계단 물량에 대해서 추가로 반영하되 관급자재로 납품되었던 자기질타일은 검수가 완료되어 추가 구매에 어려움이 있으므로

❍ 추가되는 자기질타일은 관급자재 단가를 적용한 사급자재로 반영하고,논슬립 타일 또한 공사의 시급성을 감안, 사급자재로 적용하고자 하며

❍ 이에 대해 물량 및 공사비 등을 검토한 사업관리기술자의 의견을 설계변경시 반영하고자 함.

따로붙임 : ㈜이준엔지니어링 실정보고서 1부. 끝.