투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청 (2016년 농축조 보수공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2016년 농축조 보수공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 농축조 보수공사

나. 공사기간 : 2016. 4. 1 ~ 2016. 7. 29

다. 도 급 자 : 진두건설㈜ 대표 김용호

라. 연기사유 : 공사구간(2처리장 농축조 A지, B지)내 수배전반 교체공사                                 (기전팀 시행) 시행 예정이나, 현재 미시행 상태로 상기                                 공사 완료후 농축조 보수공사를 시행해야 함에 따른 절대                                공기 부족

마. 준공기한 연기요청 현황

- 당초 : 2016. 7. 29

- 변경 : 2016. 10. 31

첨부  : 준공기한 연기요청 의뢰서 1부.  끝.

								시설보수과장
시설팀장							김재봉				시설보수과장					06/21 김일운
협조자
시행			시설보수과-1904										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)																/
전화		02-300-8590							/전송			02-300-8587					/														/	대시민공개