함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 미착공에 대한 대책 지시

1. 귀 공단에서 공사감독 중인 『암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 현재까지 실제적인 착공이 이루어지지 않아 사업수행에 차질이 매우 많으니

2. 계약일(4.29) 이후 현재까지 미착공 사유 및 실제적인 공사 예정공정표를 작성 한 후 미착공에 대한 종합적인 대책을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 제출예정인 예정공정표대로 사업을 하지 않거나, 많이 부진할 경우에는 귀 공단에 감독관리 소홀 경위서를 받겠으며, 계약업체에게는 계약 시 제출한 계약문서(공사 예정공정표)를 허위 로 작성한 것으로 간주함과 동시에 수차례에 걸처 구두로 지시한 조속 착공 지시 불이행에 대한 책임을 묻겠습니다.

4. 또한 본 공사기간의 준공기한(11.4)을 반드시 지켜 주시기 바라며, 계약업체에서임의로 공사기간을 낭비한 책임이 있으니, 향후 준공기한 연기 상황이 발생할 경우 이에 대한 책임은 계약업체에 있음을 주지시켜 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 암사동 501-3~496-26 외 8개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2016.5.9. ~ 11.4.

다. 계약금액 : 474,686,170원

라. 공사개요 : 구경 20~300㎜, 연장 1,906m

마. 계약상대자 : 제이엘피건설㈜ 김미경.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		주무관	송종범		시설관리과장	전결 06/21 남정열
협조자
시행	시설관리과-12626	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개