함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의 개최(대현산배수지(1-3지)내부 방수.방식공사)

우리사업소에서 시행중에 있는 『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 심의를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사

나. 계 약 자 : 솔바로건설(주) 대표 한훈하

다. 공사기간 : 2015.12.09.~2016.06.30

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공 사 비	645,714,800	612,907,500	감32,807,300
공급가액	587,013,455	557,188,637	감29,824,818
부 가 세	58,701,345	55,718,863	감2,982,482

마. 심의내용 : 설계변경 적정성 여부

바. 심의일시 : 2016. 6.22.(수) 10:00

따로붙임 1. 설계변경 심의자료 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	김찬오		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	06/21 오기석
협조자
시행	급수운영과-14890	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-772-7211	/전송	02)3146-2789	/	kco0178@seoul.go.kr	/	부분공개(7)