투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	새창고개구간 파고라 이설 실정보고 재검토 요청

1. 경의경춘(감)제2016-313(2016.6.20.)호와 관련입니다.

2. 『민원 반영에 따른 새창고개구간 파고라 이설 실정보고』와 관련하여 파고라 이설에 따른 공사비 재검토 요청하니 2016.6.22.(수) 까지 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

■ 재검토 요청 사항

- 실정보고 내용 중 파고라 이설에 따른 공사비가 견적가로 반영되었으나

파고라 설치에 대한 일위대가 참조하여  파고라 철거 및 재설치에 대한

공사비 산정 요망

※ 파고라 철거는 일위대가 상 파고라 설치비의 40~50% 반영 검토

붙 임 : 실정보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	06/22 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9457	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개