문서번호	시설보수과-2986
결재일자	2016.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
강신영		강병수	06/22 이성재
협 조
	주무관			정순명

2016년 단위사업계획 변경보고(수처리분야)
“자양오수중계펌프장 유입변압기 교체사업”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2016년 단위사업 계획 변경보고(수처리분야)

2016년도 시설보수과 단위사업 발주계획에 따라 추진중인 “자양오수중계펌프장 유입변압기 교체”사업을 원활하게 추진하기 위해 아래와 같이 계획 조정이 필요하기에 보고드림

단위사업 변경대상                                  (단위:백만원)

사업명	사업내용		사업예산		변경사유	비고
	변경전	변경후	변경전	변경후
자양오수중계펌프장 유입 변압기 교체	유입변압기 1대 교체	기존 유입변압기 1대를 고효율 유입변압기로 교체, 고압 수배전반 5면 교체 및 케이블 포설공사	150	219	수배전반 역시 내용연수 초과 및 노후 되었기에 전기안전 사고 방지를 위해 교체

단위사업 변경사유

시설물 점검결과 변압기 2차측 고압수배전반이 내용연수 초과 및 노후화로 절연이
약화되어 지락·단락사고 등 전기안전사고 발생우려가 높기에 고압수배전반 교체까지
일괄진행하여 소기의 사업목적을 달성하고자 함 (내용연수 10년이상 초과)

․ 사업예산 증액 : 150백만원 -> 219백만원(69백만원 증액)

사업예산 집행(안)

- 사업예산 증가분은 사업계획 조정예정인 “2처리장 생물반응조 공기공급관
보온” 사업이 본 사업과 함께 에너지사용량 절감이라는 공통의 목적을 갖고 있기에 해당예산 일부를 활용하고자 함(200백만원 중 69백만원)

추진계획

- 계약방법 : 지명경쟁입찰

- 사업기간 : 계약일로부터 120일

- 소요예산 : 219,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 물재생센터

운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비

첨  부 : 2016년도 수처리분야 단위사업 발주계획(당초) 1부.  끝.