투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(서울역 주변 교차로 개선 전기공사)

우리 본부에서 추진하고 있는「서울역 주변 교차로 개선 전기공사」준공기한을 아래와 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울역 주변 교차로 개선 전기공사

나. 계 약 자 : ㈜신흥이엔지 대표자 채종근

다. 계약금액 : 금725,637천원

라. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	’16.06.30	’16.12.31	증 184일

마. 연기사유 : 선행공사(토목) 연기에 따른 후속 전기공사 연기

바. 계약금액 : 변동없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기검토보고서 및 합의서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	06/22 권오식
협조자
시행	설비부-9809	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)