함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(논현동 28번지외 1개소 배급수관 부설공사)

1. 우리사업소가 시행중인 『논현동 28번지외 1개소 배급수관 부설공사』에 대하여 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 논현동 28번지외 1개소 배급수관 부설공사

나. 공사개요 : 당초 D=20~300mm, L=790m

변경 D=20~300mm, L=769m

다. 계 약 자 : 금산건설(주) 대표 김현중

라. 계약기간 : 2016.05.02. ~ 2016.07.30.

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

(간선배관 부설공사********0)

바. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	설계변경 금액
	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	***********	***********	*
도 급 비	***********	***********	************
관 급 비	**********	**********	************
도로복구비 및 기타	***********	***********	************

아. 설계변경 사유 : 계약물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 변경

따로붙임 : 설계변경 관련문서 1부.  끝.  추산필 2016.3.4. No.5586(감추산)

주무관	제영도		주무관	박인석		급수운영과장	조상덕		강남수도사업소장	06/22 정경효
협조자	주무관	송종학		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-12326	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	부분공개(7)