문서번호	급수운영과-15080
결재일자	2016.6.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	06/22 오기석
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(대현산배수지 내부 방수.방식공사)

2016.  6

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』설계변경과 관련하여 아래와 같이 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

공사개요

❍ 공사규모

ㆍ그라인딩 : 8,961.9㎡

ㆍ바탕고르기 : 6,292.8㎡(벽면 3,619.8㎡, 바닥 2,673㎡)

ㆍ타일압착 붙임(벽면, 바닥)  : 5,827,7㎡

ㆍ폴리우레아 도막방수(천정)  : 2,669.1㎡

ㆍ기타 균열보수 등 : 1식

❍ 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 06. 30.

❍ 공 사 비 : 896,866천원(도급비 645,715천원, 관급비 248,229천원)

❍ 시 공 사 : 솔바로건설(주)

변경내역 현황

구 분	단위	물량내역		증·감	비 고
		당 초	변 경
그라인딩	㎡	8,961.88	8,700.73	감261.15	수량변경
고압세정	㎡	8,961.88	8,700.73	감261.15	수량변경
바탕고르기(벽면,바닥)	㎡	6,292.77	-	감6,292.77
신구접착제 바르기	㎡	-	2,131.30	증2,131.3	신 규
바닥고르기 수평몰탈	㎡	-	2,483.25	증2,483.25	신 규
자기질 타일붙임	㎡	5,827.71	4,964.16	감863.55	기둥감소
폴리우레아(천정,기둥)	㎡	2,669.11	3,750.01	증1,080.9	기둥추가
단면보수	㎡	14.1	-	감14.1
균열보수	m	691.7	326.4	감365.3
강관 내.외부 특수코딩 (유입관외 4개소)	㎡	-	32.17	증32.17	파우터코팅(신규)
소운반비	톤	-	102.51	증102.51	폐기물, 관급자재(신규)

계약금액 변경현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총부기금액		645,714,800	612,907,500	감32,807,300
도급비	공급가액	587,013,455	557,188,637	감29,824,818
	부가세	58,701,345	55,718,863	감2,982,482

심의위원회 개최현황 및 결과

❍ 개최일자 : 2016.06.22.(수) 10:00

❍ 개최장소 : 3층 회의실

❍ 참석위원 : 급수운영과장외 5인

❍ 검토내용 : 설계변경 내역에 대한 단가산출 및 수량, 물량 증감 등의 적정성 검토

❍ 검토결과 : 변경내역에 대해 적정의견 제시

향후계획

❍ 설계변경 사전 심의위원회 개최결과 변경내역에 대해 적정하다는 의견이 제시됨에 따라 제시된 내역으로 설계변경을 시행하고 본청 재무과로 변경계약을 의뢰하고자 함.

따로붙임 1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경 심의개최 공문 1부.

3. 설계변경 사전심의 의뢰서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부. 끝.