투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	재사용플라자 건립공사 계약변경(공기연장, 총차 및 2차 내역변경) 의뢰

1. 건축부-8009(2016.06. 22.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 재사용플라자 건립공사와 관련하여, 아래와 같이 계약변경(공기연장,  총차 및 2차 내역변경)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 재사용플라자 건립공사

나. 계 약 자 : 동원건설산업(주) 대표 김영현, ㈜서우건영 대표김기수

다. 계약변경 내용                                               (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 차	계약금액	17,263,207,070	19,034,393,980	증 1,771,186.910
	공사기간	2015. 1.15 ~ 2017. 1.14	2015. 1.15 ~ 2017. 3.15	증 60일
2 차	계약금액	6,527,900,000	6,527,900,000	변경없음	내역변경
	공사기간	2015. 9.16 ~ 2016. 6.30	2015. 9.16 ~ 2016. 6.30	변경없음

라. 예산과목 : 자원순환과, 효율적인폐기물관리, 생활폐기물재활용극대화,

서울재사용플라자조성, 서설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임  1. 재사용플라자 건립공사 계약변경(공기 연장, 총차 및 2차 내역변경) 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(총차) 1부.

3. 총차 및 2차 공사변경 예정공정표 1부.

4. 총차 및 2차 변경내역서 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 재사용플라자 건립공사 계약변경(공기연장, 총차  및  2차 내역변경)요청(펨코엔지니어링) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	06/22 안재혁
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-8024	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)