문서번호	설비부-9867
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 06/22 권오식
협조

『관악산 저류조 설치 전기공사』

설계변경(3회) 실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『관악산 저류조 설치 전기공사』

설계변경(3회) 실정보고 사항 검토보고

『관악산 저류조 설치 전기공사』의 설계변경 실정보고 사항에 대한 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 관악산 저류조 설치 전기공사

□ 계 약 자 : 에이포유전기(주) 대표 신대식

□ 계약기간 : 2014. 4. 15. ~ 2017. 5. 30.

□ 계약금액 : 281,028,000원

관련근거

□ 전기공사 설계변경(3회) 실정보고[도림천(감)2016-123, 2016. 06. 21.]

실정보고 내용

□ 설계변경 내역

구 분	도 급 비(원)
	변경 전	변경 후	증·감
전기공사	281,028,000	330,461,000	증)49,433,000

□ 설계변경 실정보고 내용

- 서울대 정문앞 계측제어 설비 및 무정전 설비 이설

- 버들골, 공대폭포의 계측제어라인 및 CCTV추가에 따른 배관, 배선 물량 변경

□ 설계변경 세부내용

구 분	변 경 사 유	항 목	단위	물량변경			비고
				당초	변경	증·감
서울대 정문앞	○ 기존 RCS 및 UPS 이설	RCS, UPS 이설	대	0	1	1	이설
버들골	○ 계측제어라인 및 CCTV 추가	ELP관(30mm)	m	0	660	660
		핸드홀(950*450*700)	조	0	3	3
		강제전선관(28mm)	m	0	396	396
공대폭포	○ CCTV 추가	ELP관(30mm)	m	0	60	60

건설기술관리기술자 검토의견

□ 현장여건 및 물량변경, 설계도서 등을 검토한 결과 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 타당함.

보고자 의견

□ 건설기술관리기술자의 설계변경 보고가 타당하여 승인하고 계약부서에 변경계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 실정보고서 1부.

2. 제비율검증 1부.   끝.