투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(서울역 주변 교차로 개선 교통신호 감리용역)

우리 본부에서 추진하고 있는「서울역 주변 교차로 개선 교통신호 감리용역」준공기한을 아래와 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울역 주변 교차로 개선 교통신호 감리용역

나. 계 약 자 : *************

다. 계약금액 : 금11,900천원

라. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	’16.06.30	’16.12.31	증 184일

마. 연기사유 : 선행공사(토목) 연기에 따른 후속 전기공사 연기

바. 계약금액 : 변동없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기검토보고서 및 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	06/22 권오식
협조자
시행	설비부-9808	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)