문서번호	도로보수과-5794
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	06/22 노영석

『2016년 불량맨홀정비공사(연간단가)』 설계변경(1회) 검토 보고

2016. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

설계변경(제1회) 검토 보고

- 2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) -

우리 사업소에서 시행중에 있는『2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』와 관련 민원사항 및 안전사고 예방 추진를 위한 검토보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사개요 : 불량맨홀정비 507개소

○ 공사기간 : 2016.04.12 ~ 2016.12.31

○ 공사금액 : 428,855,300원

○ 도 급 자 : ㈜다현산업  대표 신시종

설계변경 사유

○ 유관기관별 맨홀정비에 따른 공종별 수량내역 조정 필요

○ 각종 불량맨홀에 대한 민원해소 및 매몰 등 불량맨홀 정비의 적기

시행으로 사전 안전사고 예방 필요

※ 2016년 불량맨홀정비 예상 소요물량 : 약 700개소

- 기 불량맨홀정비 작업완료 : 186개소(1차지시분)

- 2차작업 예상 물량개소 : 약 200개소

설계변경 내역

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		433,855,300	500,000,000	증) 66,144,700
도급비	공급가액	389,868,455	450,000,000	증) 60,131,545
	부가가치세	38,986,845	45,000,000	증) 6,013,155
	계	428,855,300	495,000,000	증) 66,144,700
이 전 비		5,000,000	5,000,000	-

○ 주요공종 변경물량

공 종	규 격	구분	단위	수 량			증 ․ 감	비 고
				당 초	변 경
하 수	∅648	주,야간	개소	77		160	증 83
상 수	∅648	주,야간	개소	41		133	증 92
하수,통신	∅766	주,야간	개소	91		105	증 14
통신,전기	∅918	주,야간	개소	72		55	감 17
통신,전기	∅1180	주,야간	개소	74		36	감 38
통신,전기(사각)	1080*580	주,야간	개소	56		37	감 19
특수소형	∅256	주,야간	개소	96		45	감 51
계			개소	517		571	증 64

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 도로평탄성 확보를 위한 유형별 수량조정과  맨홀정비 추가에 따른 비용은 낙찰잔액(66,144천원)을 활용 예산범위내에서 설계변경을 시행 불량맨홀정비 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 설계변경도서(1회) 1부.   끝.