문서번호	물재생시설과-8892
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
박만헌	강청금	정훈모	이철해		06/23 권기욱
협 조

개봉1빗물펌프장(구로구) 내 차집관로 설치요청 관련 검토 보고

2016. 6

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

개봉1빗물펌프장(구로구) 내 차집관로 설치요청 관련 검토 보고

개봉1빗물펌프장(구로구) 주변에서 본 펌프장으로 유입되는 하수로 인하여 주변 약5천여 세대의 주민이 악취와 해충 등 생활불편을 겪고 있어, 펌프장 내를 횡단하여 개거수로를 통해 흐르는 하수를 지하 차집관로로 변경설치하여 민원을 해소해 달라는 요청이 있어, 이에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

(※ 관련 근거 : 구로구 치수과-4191호, 2016.3.31)

1		요청개요(구로구)

- 붙임 구로구 요청현황 참조

□ 사업개요

❍ 위  치 : 구로구 개봉동 487 일원

❍ 규  모 : 차집관로 설치 □1.5×1.0m~2.0×2.0m, L=750m

❍ 기  간 : 2016.7~2018.6

❍ 사업비 : 5,016백만원(공사비 4,670, 설계비 265, 감리비 68, 부대비 13)

□ 주변현황

❍ 오류천과 개봉배수분구(개봉동, 고척동 일대)에서 유입되는 생활하수

및 목감천 차집관로 종점부 하수가 개봉유수지 개거수로를 통해 유입

(75,000톤/일)

❍ 인근에 약5천여 세대가 거주하는 아파트 밀집지역으로, 악취 및

병․해충류로 인한 주변 주민 생활불편으로 이에 대한 개선 요망

2		추진경위

❍ ‘16.2 : 악취사업 시행 사업비(용역비) 지원 요청(구로구→서울시)

- 환경부 악취개선사업 사업비(25억원)에서 용역비 지원 불가

❍ ‘16.3 : 개봉1빗물펌프장 내 차집관로 설치 요청(구로구→서울시)

- 서울시 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역 반영 요청

❍ ‘16.4 : 개봉1빗물펌프장 내 차집관로 설치 요청관련 업무협의

(구로구→물재생계획과, 하천관리과)

- 차집관로 설치 건의(□2.0×2.0m, L=735m)

❍ ‘16.5 : 개봉1빗물펌프장 주변 합동 현황 조사

- 참석인원 10명(서울시 3, 구로구 4, 용역사 3)

❍ ‘16.5 : 개봉1빗물펌프장 주변 거주 주민 민원 발생

- 유수지 내로 유입되는 하수로 인한 악취 해소 요청

3		관련부서 협의결과

【물재생계획과】

❍ 개봉유수지로 유입되는 계획오수량 및 적정 하수관로 규격 통보

- 계획하수량(㎥/sec, 2020) : Q(0.480~1.009), 3Q(1.441~2.876)

- 계획하수량(㎥/sec, 2030) : Q(0.441~0.920), 3Q(1.324~2.263)

- 적정 하수관로 규격 : 개봉천 유역(□1.2×1.2m), 오류천 유역(□1.2×1.2m)

※ 위 개봉천,오류천 등 유역 합류관 규격 : 2.0×1.5m

❍ 시행중인 2030하수도정비기본계획 재검토 후 관로정비계획 수립 필요

【하천관리과】

❍ 구로구 개선안 유수지 유수량은 지장이 없으나, 용역시 별도 협의

❍ 구로구 개선안은 물재생시설과 차집관로 설계용역에 포함 시행하고,

공사비 반영은 용역결과에 따라 추후 별도 협의

❍ 목감천은 홍수방어계획 수립 하천으로, 차집관로 설치시 통수능 지장

이 없어야 하며, 구체적 사업계획 수립 시 별도 협의

4		검토결과

❍ 개봉유수지 주변 주민(5천여 세대)의 악취 및 병․해충 등 생활

불편 해소를 위해 개거로 유입되는 하수를 차집하여 지하화하여

악취 해소 등 조속한 민원해결이 필요한 실정임

❍ 2030하수도정비기본계획(안) 수립 결과, 오수량 감소에 따른

차집관로 설계구간 감소로 본 용역비 우선 활용 가능

(※ 하천관리과 의견 : 우리부서 시행중인 설계용역 포함 시행)

❍ 따라서, 본 추가 과업은 현재 수행중인 도급사에 작업지시하여

실시설계 추진하고, 변경사항은 추후 설계변경 반영 조치

5		향후계획

❍ 2016.6 : 차집관로 설계용역 도급사(이산 외 2) 추가 과업지시

❍ 2016.6~ : 개봉유수지 주변 차집관로 실시설계 시행

❍ 2017~ : 공사 시행(개봉유수지 주변 차집관로 설치)

붙임 : 개봉유수지 내 차집관거 설치공사 계획서(구로구) 1부. 끝.