문서번호	동북4구사업단-5783
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	동북권발전기획팀장	동북4구사업추진반장	동북4구사업단장		도시재생본부장
강대양	오대중	정거택	이용건		06/23 진희선
협 조

창동상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립용역

준 공 기 한  연 기

2016. 6.

도시재생본부

(동북4구사업단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

준공기한 연기 보고

〈창동상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립〉

1 . 용역개요

가. 용 역 명 : 창동·상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립

나. 계 약 자 : ㈜아키플랜종합건축사사무소 대표 이종길, 이재익

(공동도급, ㈜동림피엔디 대표 이인재)

다. 계약금액 : 금사억칠백오십오만원정(￦407,550,000원)

라. 계약년월일 : 2015. 3. 5.

마. 착수년월일 : 2015. 3. 6.

바. 준공예정일 : 2016.12.30.

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
준공예정일	2016. 6.30	2016.12.30

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 국토부 2016년 일반지역 도시재생사업 지역 선정 절차 변경(1,2차관문심사 추가) 및 도시재생활성화계획에 대한 도시재생특별위원회 심의 일정 연기 등에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기

(※ 2차 관문심사 : ‘16.7월, 도시재생특위 심의 : ‘16.10월, 활성화계획 확정 : ’16.12월)

2016. 6.

보고자 : 지방시설주사  강대양