문서번호	기전과-4753
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	박심근	06/23 이종엽
협 조
	관리단속과장		박영종

『2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토 보고(2회)

2016. 6

성동도로사업소

(기 전 과)

2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토 보고(2회)

『2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사』추진중 선행 토목공정기간연장 계약으로 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

□ 관련근거

○ 대영유비텍(주) 대영GE16A-06-08호(2016.06.22):공사기간 변경요청(2회)

□ 공사개요

공 사 명	2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동
공사위치	동대문구 시조사 교차로
공사기간	2015.07.31 ~ 2016.06.30
도 급 자	㈜청록개발 대표 배한철
도 급 비	137,610,000원
감 리 사	대영유비텍(주)

□ 준공기한 연기요청

○ 연기요청 내용

공사명	공 사 기 간		비고
	당 초	변 경
2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동	2015.07.31 ~ 2016.06.30	2015.07.31 ~ 2016.09.30	공사금액 변경 없음

○ 감리단 검토내용

- 선행공정 토목공사 기간연장 계약에 따른 공기연장

○ 연기 귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 예산과목

- 도시안전본부교량안전과,교량관리,고가차도및입체교차로관리,청량1고가성능개선,시설비

□ 보고자 의견

○ 감리원 검토의견과 같이 선행공정 토목공사 기간연장 계약으로 인하여 「2015년 청량1고가 성능개선 교통신호기공사-성동」에 대하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

붙    임 : 1. 공사기간 변경 요청 및 감리 검토의견서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.