투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경(3회) 계약의뢰[관악산 저류조 설치 전기공사]

우리 본부에서 시행중인『관악산 저류조 설치 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 관악산 저류조 설치 전기공사

나. 계 약 자 : 에이포유전기㈜ 대표 신대식

다. 공사기간 : 2014. 4. 15. ~ 2017. 5. 30.

라. 설계변경(3회) 내역

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액			계약기간
	변경 전	변경 후	증·감
전기 공사	281,028,000	330,461,000	증)49,433,000	변경없음

마. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 관악산저류조설치, 시설비.

붙임 : 1. 설계변경보고서 및 합의서 각 1부.

2. 변경내역서 및 제비율 검증표 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 06/23 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-9889	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개