문서번호	도로보수과-5870
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	06/23 노영석
협조

추가재배정예산 및 낙찰차액 사용에 따른 설계변경(1회)

[2016년 교통안전시설물(노면표시) 유지보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

『추가재배정예산 및 낙찰차액 사용에 따른 설계변경(제1회)』

도심권역내 자전거횡단도 설치ㆍ공공 자전거도로 유지보수를 위한 추가 재배정 예산 사용 및 교통안전시설(노면표시)에 대한 경찰청 규제ㆍ재도색 등 각종 민원 처리를 위한 낙찰차액 사용계획 보고임.

관련 근거

❍ 도심권역내 자전거횡단도 설치공사 예산배정

(보행자전거과-6306호, 2016.05.04)

❍ 자전거 유지보수(기존 자전거도로정비)공사 예산배정

(보행자전거과-6306호, 2016.05.04)

공사 현황

❍ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

❍ 시 공 사 : 태경건설  대표 정태영

❍ 계약금액 : 474,557,000원

예산 현황

(단위:천원)

계	노면표시 유지보수(연간단가) (822,600천원)			자전거도로 유지보수 (81,050천원)
	계약금액	관급액	낙찰차액	도급액	노면표시 관급액
903,650	474,557	274,822	73,221	68,717	12,333

※ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표지선및제거, 시설비(822,600천원)

※ 예산과목 : 보행자전거과,자전거이용활성화및교통환경개선,자전거이용시설확충및관리,자전거도로유지보수,시설비(81,050천원)

검토 의견

❍ 자전거도로 추가 재배정 예산에 대하여 자전거횡단도 설치 및 공공자전거운영지역에 대한 노면표시를 정비코자 하며, 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수를 위한 유형별 수량조정에 따른 비용은 낙찰차액(73,221천원)을 활용 예산범위내에서 설계변경 시행후 공사추진에 만전을 기하고자 함 함.

붙임 : 변경설계서 1부.  끝.